「문원청계마을 공영주차장 조성사업」

설계의 경제성 등 검토(VE) 용역

과  업  지  시  서

2021. 05

【목      차】

Ⅰ. 과업의 개요

Ⅱ. 일반사항

Ⅲ. 세부 설계VE 업무 수행

Ⅳ. 성과품 제출

붙임 관련서식

Ⅰ. 과업의 개요

1. 과 업 명 : 문원청계마을 공영주차장 조성사업 설계의 경제성 등 검토(VE) 용역

2. 과업의 목적

본 과업은 건설기술진흥법 시행령 제75조의 규정에 의한 문원청계마을 공영주차장 조성사업설계의 경제성 등 검토 (이하 “설계VE"라 한다)를 통하여 대상시설물의 가치 및 기능 향상, 원가절감, 구조적 안전성 및 품질을 확보하는데 그 목적이 있다.

3. 과업의 위치

경기도 과천시 문원동 150-8번지 일원

4. 과업의 범위 : 설계의 경제성 검토(설계VE) 1식

가. 검토대상 실시설계용역 개요

검토대상 용역명	용역기간	용역 업체	비고
문원청계마을 공영주차장 조성사업 실시설계용역	2021.1월~2021.7월	㈜종합건축사사무소 근정

대 상 용 역	과 업 범 위
사 업 개 요	∘공 사 비 : 약 12,493백만원 ∘규 모 : 지하3층, 지상1층 ∘주차대수 : 180대 ∘대지면적 : 2,560㎡ ∘연 면 적 : 5,722㎡ ※ 시설 규모 및 면적은 설계 과정에서 변경(조정)될 수 있음.

5. 과업수행 내용

가. 건설원가절감을 통한 사업의 경제성 확보

나. 효과적 대안창출을 통한 설계품질 확보

다. 공사기간 단축방안 제시

라. 신기술 및 신공법 적용의 검토 및 대안 제시

마. 적용공법 및 사용재료의 적합성 검토 및 대안 제시

바. 현실적 대안제시를 통한 시공성 확보 등

6. 과업수행 변경조건

(1) 과업범위 및 내용의 증·감이 있는 경우

(2) 예산 및 기타 발주처의 형편에 의거 용역기간의 변경 또는 중단을 요할 때

(3) 천재지변 기타 불가항력적인 사유로 변경이 불가피할 때

(4) 기타 발주처가 필요하다고 인정할 때

7. 과업의 기간 : 착수일로부터 60일

Ⅱ. 일반사항

1. 적용기준

본 설계VE 과업수행은 다음의 제규정 및 시방서(가장 최근 개정 판)에 따르되 과업수행 중 관련규정 및 시방서가 개정된 경우와 특별히 규정되지 않은 사항은 발주처와 협의하여 적용토록 한다.

(1) 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부고시 제2020-15호/2020.1.13)

(2) 설계의 경제성 등 검토(설계VE) 효율화 방안 보고서(2008.3)

(3) 건설VE 매뉴얼, 건설VE의 운용기법(건설교통부 2000.9)

(4) 국토교통부, 환경부, 관련기관 또는 발주처에서 제정한 관련지침 및 기준

2. 각종 기술기준의 적용

(1) 정부의 제반규정과 표준시방서, 설계기준 등 객관적이고 공신력 있는 국내의 기준을 적용하여 시행하여야 하며 외국의 기준 등을 이용하였을 때에는 발주처가 알 수 있도록 그 인용부분 및 자료출처를 명확히 하여야 한다.

(2) 과업수행 중 사용되는 모든 자료는 그 출처 및 채택사유를 밝혀 객관성이 확보되도록 하여야 한다.

3. 용어의 정의

(1) 설계VE(Value Engineering)라 함은 최소의 생애주기 비용으로 대상시설물의 필요한 기능을 확보하기 위하여 설계내용에 대한 경제성 및 현장적용의 타당성을 기능별, 대안별로 검토하는 것을 말한다. 다만, 생애주기비용 관점에서 검토가 불가능한 경우 건설 사업비용 관점에서 검토한다.

(2) 생애주기비용이라 함은 시설물의 내구연한 동안 투입되는 총비용을 말한다. 여기에는 기획, 조사, 설계, 조달, 시공, 운영, 유지관리, 철거 등의 비용 및 잔존가치가 포함된다.

(3) 건설사업비용이라 함은 시설물의 완성단계까지 소요되는 비용의 합계를 말한다.

(4) 수정설계라 함은 설계의 경제성 등 검토업무를 통해 제시된 제안이 채택되었을 때, 설계자가 제안에 따라 실시하는 일련의 설계내용 수정 등의 작업을 말한다.

(5) 설계자라 함은 발주처로부터 도급을 받아「문원청계마을 공영주차장 조성사업 실시설계」를 수행하고 있는 자를 말한다.

(6) 설계VE 용역업자(이하 도급자라 한다)라 함은 VE업무를 수행하기 위해 발주처와 설계VE 용역계약을 체결한 자를 말한다.

(7) 설계VE책임자(VE leader : 이하 “사업책임기술자”라 한다)라 함은 당해업무의 수행을 위해 VE검토 조직의 총괄책임자로 선임된 자로서 설계의 경제성 등 검토업무 및 절차에 따라 주도적으로 수행하는 자를 말한다.

※ VE리더 : 최소한 40시간 이상 VE전문교육과정을 이수한 자

(8) 퍼실리테이터(VE Facilitator)라 함은 VE leader와 발주처, VE팀원간에 설계VE업무의 원활한 수행을 위하여 조력자 역할을 하는 자를 말한다.

(9) VE 팀원(이하 “팀원”이라 한다)이라 함은 본 과업지시서 및 관계법령에 따라 설계VE 업무를 수행하는 건설기술자를 말한다.

(10) 발주처라 함은 본 용역을 발주한 기관을 말하며, 설계VE 활동에 요구되는 각종 사항을 점검하고, 본 용역이 원활히 진행될 수 있도록 관리하는 과천도시공사(이하 발주처라 한다)를 말한다.

4. 과업지시서의 해석

과업지시서상의 문구, 용어의 해석과 과업의 범위에 대하여 발주처와 도급자가 의견을 달리하는 경우에는 발주처와 도급자가 협의 조정하여 시행한다.

5. 설계자료 검토

(1) 도급자는 다음 각 호의 자료를 설계자로부터 인계받아 검토하여야 한다.

① 설계도

② 지형도 및 지질자료

③ 설계기준

④ 표준시방서, 전문시방서, 공사시방서 및 설계업무 지침서

⑤ 사업내역서, 공사비산출서

⑥ 관련법규 등에 기초한 협의 및 허가수속 등의 진행상황

⑦ 기타 설계의 경제성 검토 조직이 필요하다고 인정하여 요구하는 자료

6. 제출물

가. 착수계

(1) 계약자는 용역계약 체결 후 7일 이내에 다음사항을 포함한 착수계를 발주처에 제출하고 과업수행을 착수한다.

① 과업수행계획서(예정공정표 포함, 과업수행 조직표, 참여인원별 업무수행내용 등)

② 참여기술자 명단(이력서, 기술자격증 사본, 경력확인서, 재직증명서) 및 인력투입 계획서

③ 보안대책 및 보안각서(참여자 전원 서명)

(2) 과업수행 계획서

① 수급인은 과업 수행계획, 수행방법 등에 관한 과업수행계획서를 작성하여야 한다.

② 과업수행계획서는 과업 단계별로 구분하여 작성하고 단계별 주요 검토사항 및 인원투입계획, 공정계획이 포함되어야 한다.

(3) 과업수행 조직구성

① 도급자는 본 과업의 성공적인 수행을 위해 설계자로부터 설계의도, 설계자료 검토를 충실히 하여 건설공사의 성격, 특성이 고려된 설계VE 및 기술자격 등급을 갖춘 자와 인원을 적정하게 배분하여 설계VE 조직을 구성하여야 하며 발주처와 사전 협의 후 배치하여야 한다.

② 설계 VE조직은 사업책임기술자(VE Leader), 퍼실리테이터(VE Facilitator), VE팀원으로 구성하여야 하며, 퍼실리테이터는 VE전문기관에서 인정한 최고수준의 VE전문가 자격 등 소지자 이어야 한다. 다만, 사업책임기술자가 최고수준의 VE전문가 자격을 갖춘 때에는 별도의 퍼실리테이터를 포함하지 않아도 된다.

※ VE(Value Engineering) 전문기관에서 인정한 최고수준의 VE 전문가 자격증

: 한국기술사회의 KCVS, 한국건설VE연구원의 CVP, 한국VE협회의 CVC-P,  SAVE의 CVS, 영국VE협회(IVM)의 CVA, 일본VE협회(SJVE)의 CVS 등

③ 사업책임기술자(VE팀 리더)는 VE전문기관에서 최소한 40시간 이상 VE전문교육과정을 이수한자로 한다. 또한 사업책임기술자는 본 용역의 워크숍 리딩 등 VE Job Plan의 전 과정에 대해 발주처 및 설계자와 협의하여 직접 과업을 이끌어가야 한다.

④ 분야별책임자(VE팀원)는 당해 건설공사에 필요한 전문분야의 기술자를 포함하여 투입인원수를 결정하고 분야별 참여인원은 발주처와 협의하여 결정한다.

⑤ 입찰참여자는 사업책임기술자를 반드시 보유하여야 하며, 사업책임기술자가 건축사가 아닐 경우 건축분야에 건축사가 반드시 포함되어야 하며, 이외분야의 기술자는 외부전문가의 참여도 가능하다.

⑥ 과업수행에 필요한 분야구분은 아래와 같으며 필요시 발주처에서 LCC분석 전문가 및 각 분야별 VE수행 경력이 있는자를 추가로 요청할 수 있다.

관련분야	분야별 자격등급		인력계획	비 고
사업책임기술자(VE팀 Leader)	VE분야	VE전문교육과정이수	1명	책임기술자가 건축사가 아닐 경우 건축분야에 건축사가 포함되어야 한다
퍼실리테이터 (VE Facilitator)	VE분야	VE관련 최고 수준의 전문가 자격증 보유	(1명)	사업책임기술자가 최고수준의 VE전문가 자격일 경우에는 포함하지 않아도 됨
분야별 책임기술자 (VE 팀원)	건축분야	시공기술사	1명 이상	※ 건설기술자의 등급 및 자격은 “건설기술진흥법 시행령” 제4조 별표1을 기준으로 한다. ※ 설계VE 검토조직 구성원은 착수 전에 발주처와 협의 후 최종 구성한다. ※ 상기 기술자외 외부전문가는 필요 시 참여
		건축사	(1명)
	구조분야	해당분야 기술사	1명 이상
	토목분야		1명 이상
	기계분야	해당분야의 기술사 또는 특급기술자	1명 이상
	전기분야		1명 이상
	통신분야		1명 이상
	소방분야		1명 이상
	조경분야		1명 이상

⑥ 설계VE 조직의 사업책임기술자와 팀원은 비상주 근무를 원칙으로 하되 발주처는 필요시 설계VE 조직원의 일부를 상주시켜 설계VE를 수행하게 할 수 있다.

나. 도급자는 용역계약기간 완료일 전에 준공검사원을 제출하고 제반서류를 준비하여 검사에 차질이 없도록 하여야 한다.

다. 도급자는 용역계약기간 중 필요시 아래와 같은 서류를 작성하여 발주처에 제출하여야 한다.

- 용역 기성부분 검사원

- 준공기한 연기원

- 기타 용역수행에 필요한 사항

7. 보고 성실이행

(1) 도급자는 1회 이상의 설계VE 관련 보고회를 실시하여야 하며, 보고 횟수 및 보고 시기는 발주처와 협의 결정하여야 하며 이에 필요한 자료를 작성하여야 한다.

(2) 발주처가 필요하다고 판단하여 보고를 지시하는 경우 도급자는 특별한 사유 없는 한 이에 따라야 한다.

(3) 도급자는 과업완료 최소 7일 이전에 최종보고서(안)를 제출하여야 하며 발주처에서 수정 또는 보완을 요구하는 경우 그 내용을 검토하여 수정․보완하여야 한다.

8. 참여기술자 투입 및 과업수행 성실의무

(1) 도급자는 과업 지시서에 명시된 업무와 계약조건을 충실히 이행해야 하며, 모든 중요한 사항에 대하여 발주처와 협의하여야 한다.

(2) 용역에 참여하는 기술자는 과업수행계획서와 일치되게 투입하여야 한다. 다만, 추가투입이나 사망, 지병, 기타사유로 교체가 불가피할 경우는 동등자격 이상으로 하여 교체자의 자격 및 경력에 대해 발주처의 사전승인을 득하여야 한다.

(3) 참여기술자가 과업수행에 부적당하다고 판단되거나 태만하다고 인정될 때에는 해당자의 교체를 요구할 수 있고 수급인은 이에 응하여야 하며 이로 인한 용역과업의 지연이나 용역기간의 연장은 인정되지 않는다.

9. 과업추진에 대한 일반사항

(1) 발주처가 도급자의 귀책사유로 과업수행이 지연된다고 판단하여 지시할 경우는 지시에 따라 지체 없이 과업이 예정대로 추진되도록 인력, 장비 등을 추가하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

(2) 본 과업지시서에 누락되었더라도 과업목적을 달성하기 위하여 당연히 필요한 사항은 발주처와 협의하여 시행하여야 한다.

10. 과업수행 결과에 대한 책임

(1) 발주처의 협의를 거친 사항이라도 설계상의 잘못이 발견될 시에는 추가 비용의 청구 없이 도급자의 책임하에 수정․보완하여야 한다.

(2) 용역 수행결과의 잘못으로 인하여 중대한 재난이 발생하거나 설계 잘못으로 인하여 발생되는 분쟁은 도급자가 책임져야 한다.

11. 위반행위에 대한 조치

다음과 같은 행위가 발생하였을 때에는 계약위반 행위로 간주하여 계약해지 또는 관계규정에 따라 조치할 수 있다.

(1) 제반지시 사항을 특별한 사유 없이 기한 내에 이행치 않을 때

(2) 계약기간 내에 완료할 능력이 없거나 현저하게 공정이 미달될 때

(3) 과업수행상 성실하지 못하거나 부주의로 인한 과실이 인정되었을 때

(4) 용역의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급 주었을 때

(5) 과업수행에 있어 계약내용을 위반하거나 과업수행에 필요한 발주처의 정당한 요구에 불응한 때

12. 과업완료후의 보완요청 등

과업완료 후라도 이 용역에 관련된 사항에 대하여 재검토 또는 보완이 필요하거나 각종 감사 및 “설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침” 제56조(제안의 채택), 제58조(제안공법심의 위원회 심의) 등으로 제안 채택 결정과 관련하여 설계자문위원회 심의 필요로 발주처의 요청이 있을 때에는 별도의 비용 청구 없이 재검토 또는 보완 제출 및 참석하여 설계VE 결과에 대하여 설명 등을 하여야 한다.

13. 성과품의 소유

도급자는 용역수행으로 인하여 발생한 각종 개발 및 조사 자료와 도면, 시방서, 견적서 등 일체의 성과품을 발주처의 소유로 하고 발주처의 승인 없이 제3자에게 제공하거나 이 용역외의 목적에 사용할 수 없으며 준공시 발주처에 정리 제출하여야 한다.

14. 기타사항

(1) 이 용역수행에 있어 제3자의 권리대상으로 되어 있는 특허권 등을 사용할 때에는 수급인은 그 권리의 사용에 관하여 일체를 책임져야 한다.

(2) 과업 지시서에 의한 모든 성과품은 원고가 작성되면 발주처의 승인을 득한 후 조판에 임하고 성과품의 편집, 인쇄방법 등은 별도로 사전에 협의하여야 하며, 결과 보고서에는 사업책임기술자, 검토자, 작성자의 서명이 있어야 한다.

(3) 용역기간 중 발주처의 사정으로 설계 VE 용역수행 기간의 조정이 필요한 경우에는 용역기간을 조정 할 수 있다.

Ⅲ. 세부 설계 VE업무 수행

1. 일반사항

(1) 도급자는 정당한 사유가 없는 한 발주처의 지시와 계약내용에 대하여 신의, 성실의 원칙을 준수하여 한다.

(2) 도급자는 본 과업지시서 및 설계 경제성 등 검토지침, 설계VE 매뉴얼 등을 철저히 숙지하여 설계VE 업무를 수행하여야 한다.

(3) 도급자는 설계자의 설계의도 등 당해 설계에 대한 정보가 부족한 경우 현장조사, 설계자 의견청취 및 추가 설계자료 조사 등을 통하여 설계내용을 충분히 검토하여야 한다.

(4) 본 과업지시서 내용에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정하는 중요사항은 발주처와 협의하여 결정하고 필요한 서류의 작성, 제출에 협조하여야 한다.

(5) 발주처가 필요하다고 인정하는 경우, 설계의 경제성 등 검토에 관한 시행지침 제8조 3항에 따라 본 사업의 설계자를 검토조직에 포함시키거나 각 단계별 회의에 참여시킬 수 있다.

2. 설계VE 업무절차 및 내용

(1) 설계VE 업무는 준비단계(Pre-Study), 분석단계(VE Study), 실행단계(Post-Study)로 나누어 실시한다.

(2) 준비단계에서는 설계VE 조직의 편성, 설계VE 활동계획 수립, 현장조사 및 관련 자료의 수집을 바탕으로 한 설계VE 오리엔테이션을 검토조직이 한 장소에 모여 워크숍 형태로 진행하여야 한다.(필요시 발주처, 설계사 참석)

(3) 분석단계에서는 기능분석, 아이디어 창출, 아이디어의 평가, 대안의 구체화, 제안서 작성과 제안내용 발표 등을 수행하여야 한다.

① 분석단계에서 해당사업의 설계자로부터 대안에 대한 의견을 듣는 것을 원칙으로 한다.

② 대안의 구체화 및 제안서 작성은 안전성, 내구성 및 기능을 손상하지 않는 범위내에서 가능한 한 유지관리비 등을 포함시킨 생애주기비용의 관점에서 행한다. 다만, 생애주기비용의 관점에서 설계VE가 불가능한 경우에는 시설물 완성단계까지의 건설사업 비용의 관점에서 행한다.

③ 당해 사업의 비용배분 및 기능분석을 명확히 할 수 있는 자료를 작성하여야 한다.

④ 분석단계는 발주청, 설계자와 검토조직이 한 장소에 모여 워크숍 형태로 수행되어야 한다.

(4) 실행단계에서는 비용절감액과 성능(기능)평가 등 현재의 Cost, 기능 평가치, 평가항목 가중치 적용 등 검토하여야 하며 또한 모든 관련 자료를 발주처에 제출하여야 한다.

3. 설계VE에 따른 제안의 내용

설계VE 조직은 <별첨1> 서식의 설계VE 제안서와 <별첨2> 서식의 생애주기비용절감․가치향상 제안서 및 다음 각 호의 내용을 포함한 서류를 작성하여 발주처에 제출하여야 한다.

(1) 당초 설계와 제안된 설계와의 차이 설명, 각각의 장․단점, 기능이 변경된 경우 그 타당성, 변경에 의한 시설물의 성능에 미치는 영향 및 이와 관련된 객관적인 자료

(2) 제안이 채택된 경우에 변경된 설계기준 또는 시방서의 목록

(3) 발주처가 제안을 채택하여 실시하는 경우 각각의 제안사항이 건설사업비에 미치는 분석자료

(4) 제안을 채택할 경우 발주처가 부담할 가능성이 있는 비용의 설명 및 견적

(5) 제안된 변경사항이 생애주기 비용에 미치는 영향에 대한 예측

(6) 제안사항이 설계 또는 시공에 미치는 영향

(7) 기타 제안의 우수성 및 타당성을 입증/판단하는데 필요한 자료

4. 설계VE 조직의 업무 범위

(1) 설계VE 대상공사의 설계자료 수집

(2) 설계VE를 위한 사전검토자료 준비

(3) 설계VE 추진계획 및 검토조직의 구성

(4) 설계 계획안의 적정성 검토 및 대안 제시

(5) 각종 구조물의 형식선정의 적합성 검토 및 대안 제시

(6) 적용공법 및 사용재료의 적합성 검토 및 대안 제시

(7) 신공법, 신기술, 특수공법 적용성의 검토 및 대안 제시

(8) 공사기간 및 공사비의 적정성 검토

(9) 설계VE 결과보고서의 작성

5. 설계VE 수행

(1) 발주처는 조직구성원의 근무상태를 점검할 수 있고, 근무가 태만하거나 기술적인 업무 추진능력이 부족한 조직구성원에 대하여는 교체를 명할 수 있으며, 도급자는 특별한 사유가 없는 한 통보 후 10일 이내에 해당 조직구성원에 대한 교체승인 요청을 하여야 한다.

(2) 도급자는 사업책임기술자 및 팀원을 본 과업의 완료시까지 원칙적으로 변경할 수 없다. 다만, 변경이 불가피할 경우에는 당초 조직구성원과 기술자격이 동등하거나 그 이상인 자로서 담당자와 사전협의, 승인을 얻어야 한다.

(3) 사업책임기술자, 분야별 책임기술자 및 분야별 참여기술자는 반드시 당해 용역수행에 참여하여야 하며 당해 용역에 참여하지 아니하는 경우 계약해제 또는 해지의 사유가 될 수 있다.

(4) 설계VE 조직 책임자는 업무를 수행하는 동안 다음 서류를 작성 후 서명 날인하여 사무실에 비치, 운영하며 발주처 요구가 있으면 언제든지 열람 확인할 수 있도록 하여야 하며 본 용역 완료시 발주처에 제출하여야 한다.

① 설계VE 활동일지(VE검토일지)

② 회의록, 실시설계 협의사항 기록부

③ 설계도서 검토 근거서류

④ 기타 발주처가 필요하다고 인정하는 서류

6. 보고 및 의무

(1) 과업수행 결과에 대한 보완의무

① 과업수행 중 보완 및 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 VE 담당자의 지시에 따라야 한다.

② 발주처는 협의를 거친 사항이라도, 과업완료 후 보완이 필요한 경우 보완요구 할 수 있으며, 이 경우 도급자는 자기부담으로 즉시 보완하여야 한다.

(2) 공정보고

① 도급자는 용역수행 중 필요시나 발주처의 요구에 따라 공정보고를 하여야 하며, 공정 보고시에는 과업수행내용, 향후 추진일정 및 계획 등을 포함하여 보고하여야 한다.

② 과업진행 및 세부내용 검토를 위해 발주처의 요구가 있을 시에는 도급자는 조건 없이 응하여 필요한 자료를 제출 또는 업무 진행 사항을 보고하고 협의하여야 한다.

③ 도급자는 공정보고시 및 업무협의시에 제시된 의견 및 도출된 문제점을 검토, 보완하여야 한다.

④ 용역보고 자료준비 등은“을”이 부담하여야 한다.

(3) 보안사항

① 도급자는 보안대책을 수립하여 구성원에게 교육을 실시하고 보안각서를 착수계와 함께 제출하여야 한다.

② 모든 용역관련 성과품은 VE 담당자의 허락 없이 임의로 소유하거나 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 된다.

③ 본 과업수행과 관련하여 습득한 모든 기록 및 자료 등은 본 업무와 관련이 없는 일에 사용할 수 없으며, 사전승인 없이 타인 및 타 기관에 제공 대여할 수 없다.

④ 과업 중 보안에 관계되는 사항에 대하여 통제를 엄격히 하여 결함이 없도록 하여야 하고, 보안사항 불이행으로 발생하는 모든 문제는 도급자가 책임을 진다.

⑤ 본 과업과 관련하여 취득한 보안사항은 설계의 경제성 등 검토 용역 완료 후에도 외부에 유출시켜서는 안 된다.

(4) 각 과업별 대상과업에 따라 설계VE 수행절차 상의 Job Plan에 의한 세부내용과 기법의 활용실적이 포함된 「설계VE 제안서」를 충실히 작성하여야 한다.

(5) 도급자는 다음사항을 포함한 설계VE 제안서를 검토 과업별로 제출하여야 하며, 설계VE 보고서의 성과는 가능한 계량되어 질 수 있도록 작성하여야 한다.

- 설계VE 제안 취지 및 배경

- 설계VE 검토기법 활용사항

- 제안내용의 기대효과

- 관련 설계기준, 참여기술자

Ⅳ. 성과품 제출

본 용역 완료시 설계VE 제안서, 사례집 등의 성과품을 각 단계 공사별로 작성하여 다음과 같이 준공일에 제출하여야 한다.

- 설계VE 제안서 (종합보고서와 요약보고서)      :    각 10부

- 보고서 내용을 수록한 CD-ROM, USB           :    각  2개

- 설계검토 기록 서류 일체 (회의록 포함)        :        1식

별첨 #1

설계VE 제안서
제안자	① 상호 또는 명칭		② 면허 또는 등록 번 호
	③ 주 소	(전화 : )
	④ 대 표 자 성 명		⑤ 생 년 월 일
사업 개요	⑥ 사 업 명
	⑦ 사 업 비		⑧ 사 업 기 간
	⑨ 발 주 처		⑩ 담 당 부 서
제안내용	⑪ 제 안 건 수		⑫ 절 감 액
「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침」 제55조제1항에 따라 사업의 설계VE제안서를 제출합니다. 년 월 일 제 안 인 (인) 과천도시공사사장 귀하

별첨 #2

생애주기비용절감․가치향상 제안서

제안서번호 :

사 업 명						발주청담당자
제안자명
제 안 명
제안내용		개 선 전(개략도면 포함)				개 선 후(개략도면 포함)
경제성평가결과		생애주기비용(LCC)절감효과					가치향상효과
		①	②	③	④	절감율 (④/L1×100%)	⑤		⑥	가치향상도 {(V2-V1)/V1}×100%)
		건설사업 비용	유지관리 비용	계(LCC) (=①+②)	절감액 (=L1-L2)		성능 점수 [P](점)		가치 점수 [V](점)
	개선전			L1=			P1=		V1=
	개선후			L2=			P2=		V2=
제안의특징		장 점			단 점				시공시 주의할점
효 과 (기술성)
※유지관리비용은 현재가치를 기입함 ※성능점수 및 가치점수는 공종 및 구성요소가 아닌 전체 프로젝트 기준으로 평가함 ※생애주기비용으로 설계의 경제성 검토가 불가능한 경우 「건설사업비용절감 제안서」로 대체